ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
Для размещения в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ	
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):	
субъект Российской Федерации	Смоленская область	,	
муниципальное образование	Глинковский район	,	
населенный пункт	С. Глинка	,	
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):	
	67:04:0010124		
	 с. Глинка, ул. Шардина, пер. Шардина, ул. Красная д.4- д.14		
	(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой		
			
	будут выполняться комплексные кадастровые работы)		
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта	
от	«	24	»	июня		2021	г. №	034/2021		
в период с	«	6	»	июля		2021	г. по «	25	»	декабря		2021	г.	
будут выполняться комплексные кадастровые работы.	
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:	
	Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области		
Адрес	216320, Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка, д.8		
Адрес электронной почты	glinka@admin-smolensk.ru	Номер контактного телефона	8 (48165) 2-15-44		
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):	
Фамилия, имя, отчество	Лысевич Виталий Викторович		
Адрес	214020,г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, оф. 315		
Адрес электронной почты	Smol-geo@mail.ru  	Номер контактного телефона	8 (4812) 31-31-53		
Квалификационный аттестат: № 67-11-0115 от 24 января 2011 г.	
Идентификационный номер	325	дата выдачи	03.04.2012 г.		
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом
	
которой является кадастровый инженер 	Ассоциация СРО «ОПКД»		
График выполнения комплексных кадастровых работ 
Время выполнения работ	
Место выполнения работ	
Виды работ	

в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения контракта 	
Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка	
1. Заказчик обеспечивает информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ.
2. Исполнитель направляет извещение о начале выполнения  комплексных кадастровых работ по адресам и (или) адресам электронной почты правообладателей объектов недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ (при наличии таких сведений в Едином государственном реестре недвижимости).
3. Исполнитель получает и собирает документы, содержащие необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ, исходные данные.	

в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения контракта 	
Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка	
1. Заказчиком формируется согласительная комиссия.
2. Исполнитель проводит обследование территории комплексных кадастровых работ.
3. Исполнитель проводит геодезическую съемку территории комплексных кадастровых работ.
4. Исполнитель  подает заявление о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав.	

в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня опубликования извещения 	
Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка	
Исполнитель собирает информацию от правообладателей объектов недвижимости об  адресах их регистрации и документах об объектах недвижимости.	

не позднее 19.07.2021	
Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка	
Исполнитель представляет в орган регистрации прав заявление об учете адресов правообладателей объектов недвижимости.	

не позднее  31.08.2021	
Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка	
1. Исполнитель проводит обследования объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости.
2. Исполнитель определяет координаты характерных точек местоположения границ объектов недвижимости, расположенных в кадастровом квартале, в отношении которого проводятся комплексные кадастровые работы.
3. Исполнитель формирует схемы границ земельных участков с отображением образуемых и уточняемых земельных участков.
4. Исполнитель подготавливает проект карты-плана территории.
5. Исполнитель проверяет карту-план территории при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» с формированием протокола проверки.	

не позднее 07.09.2021	
Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка	
1.	Исполнитель представляет заказчику проект карты-плана территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе.
2.	Заказчик направляет для рассмотрения проект карты-плана территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, в согласительную комиссию.
3.	Заказчик направляет Исполнителю извещение о проведении заседания согласительной комиссии.	

не позднее 30.09.2021	
Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка	
Проведение заседания согласительной комиссии, в том числе с участием Исполнителя.	

в течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней с первого заседания согласительной комиссии 	
Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка	
Принятие в согласительную комиссию возражений относительно местоположения границ земельных участков.	

не позднее 20.11.2021
(сроки то до 11 ноября)	
Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка	
Исполнитель оформляет проект карты-плана территории в окончательной редакции и направляет Заказчику (согласительной комиссии) проект карты-плана территории и сопутствующих материалов (работ)	

в течение 20 (двадцати) рабочих дней) со дня истечения срока предоставления возражений 	
Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка	
Согласительная комиссия направляет Заказчику необходимые для утверждения проекта карты-плана территории материалы заседания согласительной комиссии.	

не позднее 25.11.2021	
Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка	
Утверждение Заказчиком карты-плана территории.	

по 25.12.2021	
Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка	
1.	Направление Заказчиком утвержденной карты-плана территории в орган регистрации прав для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости.
2.	Обеспечение Заказчиком внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости;
3.	Направление Заказчиком уведомления о внесении сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости Исполнителю;
4.	Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии);
5.	Подписание Заказчиком акта выполненных работ.	

							
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.	
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.	
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:	
	Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка, ул. Ленина, д.8	.	
Заинтересованные лица вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.